Vorgangsliste

Vorgangsliste: Prototyp für ein Offline-Informationssystem entwickeln	
Vorgangs-nummer	Vorgangsbezeichnung	Dauer 
in Stunden	Vorgänger	Nachfolger	
1	Anforderungsdefinition des Prototyps	4		2	
2	ER-Diagramm und Attribute beschreiben	3	1	3, 4, 5, 7	
3	Tabelle entwerfen	2	2	6	
4	Formulare entwerfen	3	2	6	
5	Berichte entwerfen	3	2	6	
6	Entwürfe abstimmen	2	3, 4, 5	8, 9, 10	
7	Testdaten erstellen	3	2	12	
8	Tabellen erstellen	2	6	11	
9	Formulare erstellen	2	6	11	
10	Berichte erstellen	3	6	11	
11	Menü erstellen	1	8, 9, 10	12, 13	
12	Prototyp testen	2	7, 11	14	
13	Prototyp dokumentieren	3	11	14	
14	Prototyp präsentieren	1	12, 13		

Rb-inf11